Стан виконання Плану заходів з реалізації Дорожньої карти реформування управління публічними інвестиціями 
на 2024—2028 роки
(станом на 01.07.2025)
  
Найменування заходу	Відповідальні за виконання	Строк виконання	Очікуваний результат (індикатор виконання)	Орієнтовний обсяг та/або джерела фінансування	Стан виконання заходу	
Завдання 1. Законодавче унормування уніфікованих процедур управління публічними інвестиціями
	
1. Розроблення проектів законів України щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких законів України стосовно управління публічними інвестиціями	Мінфін
Мінекономіки
Мінінфраструктури	вересень 2024 р.	проекти Законів України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо управління публічними інвестиціями» схвалено Урядом	не потребує додаткового фінансування
	Виконано частково.
Проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо актуалізації та удосконалення деяких питань» схвалено Урядом 22.11.2024 (реєстраційний номер 12245 від 25.11.2024). Закон прийнято Верховною Радою України 16.01.2025 №4225-IX, набрав чинності 05.03.2025.
Проект Закону України щодо внесення змін до деяких законів України стосовно управління публічними інвестиціями готується з урахуванням Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо актуалізації та удосконалення деяких питань» та буде додатково подано на розгляд Кабінету Міністрів України.	
2. Розроблення проектів нормативно-правових актів, що випливають із змін до Бюджетного кодексу України, та внесення змін до деяких законів України	Мінекономіки
Мінфін
Мінінфраструктури
інші центральні органи виконавчої влади	лютий 2025 р.	прийнято нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України	не потребує додаткового фінансування	Виконується
Відповідно до Плану організації підготовки проектів актів та виконання інших завдань, необхідних для реалізації Закону України від 16.01.2025 № 4225-IX “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо актуалізації та удосконалення деяких положень”.

	
Завдання 2. Запровадження стратегічного планування публічних інвестицій
	
3. Утворення Стратегічної інвестиційної ради для забезпечення узгодження стратегічних пріоритетів здійснення публічних інвестицій	Мінфін
Мінекономіки
Мінінфраструктури	червень
2024 р.	положення про Стратегічну інвестиційну раду схвалено Кабінетом Міністрів України	не потребує додаткового фінансування
	Виконано
Постанова Кабінету Міністрів України  від 14.05.2024 № 549 «Про утворення Стратегічної інвестиційної ради», передбачає затвердження її складу та положення. 	
4. Подання на розгляд Стратегічної інвестиційної ради переліку пріоритетних публічних інвестиційних проектів на 2025 рік у рамках реалізації перехідної моделі управління публічними інвестиціями	Мінфін Мінекономіки
Мінінфраструктури	вересень 
2024 р.	перелік пріоритетних публічних інвестиційних проектів на 2025 рік розглянуто Стратегічною інвестиційною радою	не потребує додаткового фінансування
	Виконано
Перелік пріоритетних публічних інвестиційних проектів на 2025 рік розглянуто та схвалено Стратегічною інвестиційною радою (протокол № 2 засідання Стратегічної інвестиційної ради від 10.09.2024 р.)
(доручення Прем’єр-міністра України від 13.09.2024 № 29877/0/1-24).
	
5. Розроблення Концепції національної системи стратегічного планування, що містить опис системи документів стратегічного планування, включаючи довгостроковий документ національного розвитку, підходів до цілевизначення, цілепокладання та взаємозв’язку між стратегічними документами, основних учасників стратегічного планування та їх ролей, узгодження з макрофіскальною рамкою	Мінекономіки
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Мінфін
Мінінфраструктури
інші центральні органи виконавчої влади	грудень
2024 р.	прийнято акт Кабінету Міністрів України	не потребує додаткового фінансування
	Виконується
Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції національної системи стратегічного планування” внесено на розгляд Уряду листом Мінекономіки від 01.04.2025 № 3033-02/27390-01 (лист Мінекономіки від 22.07.2025 №3502-05/49810-03)
	
6. Розроблення проектів законів України на виконання Концепції національної системи стратегічного планування	Мінекономіки
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Мінфін
Мінінфраструктури
інші центральні органи виконавчої влади	червень 
2025 р.	проекти схвалено Кабінетом Міністрів України	не потребує додаткового фінансування	Виконується
Розроблення відповідних проектів законів буде здійснено за наслідками прийняття Урядом рішення щодо схвалення Концепції національної системи стратегічного планування, що була направлена на розгляд Уряду листом Мінекономіки від 01.04.2025 
№ 3033-02/27390-01 можливе (лист Мінекономіки від 22.07.2025 №3502-05/49810-03)
	
8. Підготовка порядку розроблення галузевих (секторальних) стратегій, а також проведення моніторингу, оцінки результатів їх реалізації та звітування	Мінекономіки
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади	лютий 2025 р.	прийнято акт Кабінету Міністрів України	не потребує додаткового фінансування	Виконується
Лист Мінекономіки від 13.01.2025 №3501-05/3221-01, лист СКМУ від 27.01.2025 №2175/0/2-25 щодо обговорення та узгодження підходів та пропозицій з підготовки порядку.	
9. Розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо підготовки та моніторингу реалізації галузевих (секторальних) стратегій	Мінекономіки
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Мінфін	лютий 2025 р.	видано наказ Мінекономіки	не потребує додаткового фінансування	Виконується
Лист Мінекономіки від 13.01.2025                   № 3501-05/3221-01, лист СКМУ                     від 27.01.2025 № 2175/0/2-25 щодо обговорення та узгодження підходів та пропозицій з підготовки рекомендацій.	
11. Розроблення проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки стосовно управління публічними інвестиціями	Мінінфраструктури
Мінфін
Мінекономіки
обласні державні (військові) адміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)	січень 2025 р.	прийнято акт Кабінету Міністрів України	не потребує додаткового фінансування	Виконано
Постанова Кабінету Міністрів України  від 13.08.2024 № 940 «Про внесення змін до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки», лист Мінрозвитку від 14.01.2025 № 941/24/10-25.	
15. Підготовка порядку розроблення та моніторингу виконання середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій, включаючи пріоритетні галузі для інвестування, основні напрями інвестування в розрізі сфер політики та регіонів і відповідний розподіл фінансування, наскрізні стратегічні цілі здійснення інвестицій (енергоефективність, інклюзивність, подолання наслідків зміни клімату тощо) та загальні підходи до визначення критеріїв скринінгу та подальшого відбору проектів	Мінекономіки
Мінфін
Мінінфраструктури	січень 2025 р.	прийнято акт Кабінету Міністрів України	не потребує додаткового фінансування	Виконано
Постанова Кабінету Міністрів України  від 28.02.2025 №294 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій»  	
16. Розроблення та прийняття Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій, схваленого Стратегічною інвестиційною радою	Мінекономіки
Мінфін
Мінінфраструктури
Стратегічна інвестиційна рада	травень 
2025 р.	прийнято акт Кабінету Міністрів України	не потребує додаткового фінансування	Виконано
Стратегічна інвестиційна рада схвалила Середньостроковий план (протокол № 10 від 27.06.2025.
Урядом України прийнято Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.07.2025 № 671-р «Про затвердження Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026–2028 роки»
	
Завдання 3. Створення методологічної бази управління публічними інвестиціями	
17. Розроблення порядку підготовки публічних інвестиційних проектів (від концепції проекту до публічного інвестиційного проекту), що потребують фінансування з бюджету (за рахунок всіх джерел бюджету, зокрема коштів міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав) і державної підтримки (державні гарантії, державно-приватне партнерство), з чітким розподілом функцій між учасниками процесу	Мінекономіки
Мінфін
Мінінфраструктури	лютий 2025 р.	прийнято акт Кабінету Міністрів України	не потребує додаткового фінансування	Виконано
Постанова Кабінету Міністрів України  від 28.02.2025 №527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями».
Передбачає затвердження Порядку підготовки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій.  

	
18. Розроблення порядку формування секторальних портфелів та єдиного портфеля публічних інвестиційних проектів, включаючи скринінг (попередній аналіз) та пріоритезацію публічних інвестиційних проектів за критеріями стратегічної актуальності, фінансової доцільності, соціальної та економічної ефективності, технічної доцільності та інституційної спроможності, кліматичної стійкості, з чітким розподілом функцій між учасниками процесу	Мінекономіки
Мінфін
Мінінфраструктури
Стратегічна інвестиційна рада	лютий 2025 р.	прийнято акт Кабінету Міністрів України	не потребує додаткового фінансування	Виконано
Постанова Кабінету Міністрів України  від 28.02.2025 №527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями».
Передбачає затвердження Порядку формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави (регіону, територіальної громади) і галузевого (секторального) проектного портфеля держави (регіону, територіальної громади) 

19. Розроблення порядку оцінки публічних інвестиційних проектів, включаючи соціально-економічний, фінансовий, екологічний аналіз та аналіз ризиків, з урахуванням масштабності (вартості) та ступеня нагальності задоволення суспільних потреб, чіткий розподіл функцій між учасниками процесу, а також незалежну оцінку масштабних публічних інвестиційних проектів	Мінекономіки
Мінфін
Мінінфраструктури	лютий 2025 р.	прийнято акт Кабінету Міністрів України	не потребує додаткового фінансування	Виконано
Постанова Кабінету Міністрів України  від 28.02.2025 №527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями».
Передбачає затвердження Порядку оцінки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій

	
20. Розроблення порядку та критеріїв відбору публічних інвестиційних проектів для подальшого фінансування з бюджету та з наданням державної підтримки, включаючи ступінь готовності проекту, відповідність секторальним та/або регіональним стратегічним пріоритетам	Мінфін
Мінекономіки
Мінінфраструктури	лютий 2025 р.	прийнято акт Кабінету Міністрів України	не потребує додаткового фінансування	Виконано
Постанова Кабінету Міністрів України  від 28.02.2025 №232 «Деякі питання розподілу публічних інвестицій», Передбачає затвердження Порядку розподілу коштів державного бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій. 	
21. Розроблення та затвердження методики визначення джерел (механізмів) фінансування публічних інвестиційних проектів	Мінфін
Мінекономіки	лютий 2025 р.	видано наказ Мінфіну	не потребує додаткового фінансування	Виконано
Видано наказ Міністерства фінансів 
України від 28.02.2025 № 131 (зареєстрований у Мінюсті 09.04.2025 за №541/43947. Передбачає затвердження методики визначення джерел і механізмів фінансового забезпечення публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій.	
22. Розроблення порядку реалізації публічних інвестиційних проектів, їх моніторингу за фінансовими і фізичними показниками виконання та оцінки їх ефективності з чітким розподілом функцій між учасниками процесу	Мінекономіки
Мінфін
Мінінфраструктури	лютий 2025 р.	прийнято акт Кабінету Міністрів України	не потребує додаткового фінансування	Виконано
Постанова Кабінету Міністрів України  від 28.02.2025 №527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями».
Передбачає затвердження Порядку реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій на державному, регіональному та місцевому рівні	
24. Розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо підготовки, скринінгу, пріоритезації, оцінки, відбору, виявлення ризиків, реалізації, моніторингу та оцінки ефективності публічних інвестиційних проектів на регіональному та місцевому рівні з чітким розподілом функцій між учасниками процесу	Мінекономіки
Мінінфраструктури
Мінфін	березень 
2025 р.	видано наказ Мінекономіки	не потребує додаткового фінансування	Виконується
Методичні рекомендації за інформацією наданою Мінекономіки підготовлені, очікується прийняття.
(додаток до листа Мінекономіки від 14.04.2025 № 3501-05/30282-03)	
25. Розроблення галузевих методичних рекомендацій щодо особливостей підготовки, проведення оцінки, пріоритезації та реалізації публічних інвестиційних проектів у відповідних галузях	Міністерства
та інші центральні органи виконавчої влади	травень 
2025 р.	видано накази відповідних центральних органів виконавчої влади	не потребує додаткового фінансування	Виконується
Мінрозвитку здійснює підготовку до розроблення галузевих методичних рекомендацій щодо особливостей підготовки, проведення оцінки, пріоритезації та реалізації публічних інвестиційних проектів у відповідних галузях – формується робоча група та готується наказ щодо її створення (лист Мінрозвитку від 21.07.2025 № 17978/24/10-25)	
26. Розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо проведення аналізу екологічних наслідків та впливу реалізації публічного інвестиційного проекту на навколишнє природне середовище та аналізу дотримання вимог щодо інклюзивності та безбар’єрності, а також щодо відповідності Цілям сталого розвитку під час підготовки публічного інвестиційного проекту на державному, регіональному та місцевому рівні	Мінекономіки
Міндовкілля
Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади	березень 
2025 р.	видано наказ Мінекономіки	не потребує додаткового фінансування	Виконується
Наказом Мінекономіки створено робочу групу, до складу якої увійшли в т.ч. представники Міндовкілля та Мінсоцполітики, наразі відбувається підготовка методичних рекомендацій (додаток до листа Мінекономіки від 14.04.2025 № 3501-05/30282-03)
Проєкт методичних рекомендацій щодо проведення аналізу екологічних наслідків та впливу реалізації публічного інвестиційного проєкту на навколишнє природне середовище та аналізу дотримання вимог щодо
інклюзивності та безбар’єрності, який надіслано до Мінрозвитку, Мінсоцполітики та Міндовкілля для опрацювання та надання пропозицій (лист Мінекономіки від 22.07.2025 №3502-05/49810-03)	
28. Розроблення та затвердження методичних рекомендацій з проведення органами Держаудитслужби та її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту публічних інвестиційних проектів з урахуванням міжнародних стандартів	Держаудитслужба	червень 
2025 р.	затверджено Методичні рекомендації з проведення органами Держаудитслужби та її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту публічних інвестиційних проектів	не потребує додаткового фінансування	Виконано
наказом Держаудитслужби від 26 червня 2025 року № 182 затверджено Методичні рекомендації з проведення органами Держаудитслужби та її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту публічних інвестиційних проєктів з урахуванням міжнародних стандартів 
(лист Держаудитслужби від 30.06.2025 № 002200-15/8143-2025)	
Завдання 4. Удосконалення середньострокового бюджетного планування публічних інвестицій, оцінки різних аспектів фінансової сталості публічних інвестицій на всіх етапах інвестиційного циклу та посилення управління фіскальними ризиками державного та місцевих бюджетів, пов’язаними з публічними інвестиціями	
29. Розроблення концепції використання та обліку довгострокових бюджетних зобов’язань та умовних зобов’язань для реалізації публічних інвестиційних проектів з урахуванням необхідності забезпечення макрофіскальної стабільності та боргової стійкості	Мінфін
Мінекономіки	січень 2025 р.	підготовлено концептуальну записку	не потребує додаткового фінансування	Виконується
Лист Мінфіну від 26.03.2025 №55000-02-3/8952 до Кабінету Міністрів України щодо зняття з контролю, питання буде врегульовано під час виконання пункту 31 Плану заходів	
30. Розроблення підходів до фінансування заходів, пов’язаних з підготовкою публічних інвестиційних проектів, за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів, коштів міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав, інших джерел	Мінфін
Мінекономіки
Мінінфраструктури	березень 
2025 р.	підготовлено концептуальну записку	не потребує додаткового фінансування	Виконано
Лист Мінфіну від 26.03.2025 №55000-02-3/8953 до Кабінету Міністрів України щодо зняття з контролю у зв’язку з врегулюванням питання у прийнятих нормативно-правових актах 	
32. Методологічне забезпечення бюджетного планування публічних інвестицій відповідно до стратегічних цілей та ресурсної рамки, включаючи розроблення та затвердження методик:
розрахунку граничного обсягу видатків на реалізацію публічних інвестиційних проектів з дотриманням лімітів за різними видами публічних інвестицій для забезпечення боргової стійкості та мінімізації фіскальних ризиків

розрахунку вартості публічного інвестиційного проекту, включаючи капітальні та поточні витрати на підготовку та реалізацію проекту і експлуатаційні витрати	Мінфін
Мінекономіки	березень 
2025 р.	видано накази Мінфіну	не потребує додаткового фінансування	Виконано 

Видано наказ Мінфіну від 31.12.2024 № 675 «Про затвердження Методичних підходів до розрахунку базового обсягу витрат, бюджетного простору та вартості нових політик», в якому  враховано положення щодо розрахунку граничного обсягу видатків на реалізацію публічних інвестиційних проектів

Видано наказ Мінфіну від 23.06.2025 № 316 «Про затвердження Методики розрахунку вартості публічного інвестиційного проєкту» (із змінами внесеними наказом Мінфіну 
від 15.07.2025 № 354), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 липня 2025 року за № 1053/44459
	
33. Розроблення та внесення до нормативно-правових актів Мінфіну змін щодо відображення у бюджетних запитах та паспортах бюджетних програм розширеної інформації про мету, очікувані результати, стислий опис заходів, загальну вартість публічного інвестиційного проекту, включаючи утримання створених активів, індикативні показники фінансування на два наступні за плановим роки та план фінансування публічного інвестиційного проекту до завершення його реалізації	Мінфін	травень
 2025 р.	видано накази Мінфіну	не потребує додаткового фінансування	Виконується
Лист Мінфіну від 30.05.2025 № 55000-02-3/15630 до Кабінету Міністрів України щодо продовження виконання	
34. Внесення змін до наказу Мінфіну від 14 січня 2011 р. № 11 “Про бюджетну класифікацію” стосовно забезпечення належного відображення та обліку публічних інвестицій	Мінфін	лютий 2025 р.	видано наказ Мінфіну	не потребує додаткового фінансування
	Виконано
Видано наказ Мінфіну від 10.04.2025 № 191 "Про внесення змін до Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету", передбачено окреме кодування бюджетних програм, за якими передбачаються видатки на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій 	
35. Визначення підходів до відображення в бухгалтерському обліку та звітності про виконання бюджетів коштів публічних інвестицій, отриманих від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав, інших джерел, використання яких здійснюється з рахунків, відкритих у банках України та іноземних банках	Мінфін
Казначейство	березень 
2025 р.	підготовлено концептуальну записку	не потребує додаткового фінансування	Виконано
Лист Мінфіну від 07.03.2025 №41020-01-3/7103 до Кабінету Міністрів України щодо зняття з контрою у зв’язку з відсутністю потреби у визначенні окремих підходів та підготовки концептуальної записки	
37. Створення Міжвідомчої комісії у складі представників Мінфіну, Мінекономіки та Мінінфраструктури для щорічного відбору публічних інвестиційних проектів для подальшого фінансування з бюджету та з наданням державної підтримки (державні гарантії, державно-приватне партнерство) в межах граничних обсягів видатків Державного бюджету України на відповідний рік для забезпечення дотримання вимоги, що тільки ті проекти, які пройшли встановлені процедури оцінки та відбору, можуть бути включені до бюджету, а також дотримання граничних обсягів за різними видами публічних інвестицій для забезпечення боргової стійкості та мінімізації фіскальних ризиків	Мінфін
Мінекономіки
Мінінфраструктури	січень 2025 р.	положення про Міжвідомчу комісію з відбору публічних інвестиційних проектів затверджено Кабінетом Міністрів України	не потребує додаткового фінансування	Виконано
Постанова Кабінету Міністрів України  від 28.02.2025 № 232 “Деякі питання розподілу публічних інвестицій”. Передбачає утворення Міжвідомчої комісії з питань розподілу публічних інвестицій та затвердження її складу та положення.  	
38. Розроблення примірного положення про комісію з відбору публічних інвестиційних проектів на місцевому рівні для забезпечення дотримання вимоги, що тільки ті проекти, які пройшли встановлені процедури оцінки та відбору, можуть бути включені до бюджету, а також дотримання граничних обсягів за різними видами публічних інвестицій для забезпечення боргової стійкості та мінімізації фіскальних ризиків

	Мінфін
Мінінфраструктури
Мінекономіки	лютий 2025 р.	видано наказ Мінфіну	не потребує додаткового фінансування	Виконано
Видано наказ Мінфіну від 15.04.2025 № 202 "Про затвердження примірного Положення про місцеву комісію з питань розподілу публічних інвестицій"
	
Завдання 5. Створення ІТ-архітектури управління публічними інвестиціями на основі оновленої методологічної бази	
39. Розроблення концепції єдиної цифрової екосистеми управління публічними інвестиціями на основі оновленої методологічної бази, опис її основних компонентів, включаючи Єдину цифрову інтегровану інформаційно-аналітичну систему управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (екосистема DREAM) (єдиний банк проектів, що пройшли встановлені процедури оцінки та відбору, та забезпечення їх моніторингу), ІТ-системи Мінфіну для планування та моніторингу виконання державного та місцевих бюджетів (відображення відібраних для фінансування проектів у бюджеті), Prozorro (планування та реалізація закупівель), Казну (виконання проектів з фінансування), та їх взаємна інтеграція для забезпечення наскрізного управління процесом	Мінфін
Мінінфраструктури
Мінекономіки	травень 
2025 р.	прийнято акт Кабінету Міністрів України	не потребує додаткового фінансування	Виконується
Доручення Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля від 26.05.2025 №7036/118/1-25 до листа Мінфіну від 20.05.2025 №55000-02-3/14406 щодо продовження виконання	
Завдання 6. Підвищення інституційної спроможності органів з управління публічними інвестиціями	
44. Розроблення примірного положення про підрозділ з управління публічними інвестиціями на центральному, регіональному та місцевому рівні	Мінекономіки
Мінфін
Мінінфраструктури	грудень 
2024 р.	видано наказ Мінекономіки	не потребує додаткового фінансування
	Виконується
Проєкти примірних положень про підрозділи з управління публічними інвестиціями на центральному, регіональному та на місцевому рівнях, які доопрацьовано з урахуванням пропозицій Мінфіну та Мінрозвитку і відповідний проєкт наказу Мінекономіки проходить внутрішнє погодження 
(лист Мінекономіки від 22.07.2025 №3502-05/49810-03) 	
45. Забезпечення визначення (створення) у структурі відповідного органу підрозділу з управління публічними інвестиціями	Мінекономіки
Мінфін
Мінінфраструктури
Інші центральні органи виконавчої влади 
Обласні державні (військові) адміністрації	грудень 
2024 р.	кількість підрозділів з управління публічними інвестиціями 	не потребує додаткового фінансування
	Виконується
Створено:
Сектор з питань управління публічними інвестиціями в Міністерстві фінансів України (наказ Мінфіну від 18.02.2024 № 128);
Управління публічними інвестиціями в Мінекономіки (наказ Мінекономіки 
від 01.02.2024 № 2938).
Введено в дію структуру та штатний розпис апарату Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, яким визначено Управління стратегічного планування та відновлення відповідальним за управління публічних інвестицій. Наказ Міндовкілля від 11.02.2025 № 268 (лист Міндовкілля від 14.04.2025 № 25/8-22/5177-25) 

Затверджено оновлену структуру та штатну чисельність Департаменту економіки Одеської обласної державної адміністрації. Розпорядженням голови (начальника) обласної державної (військової) адміністрації від 06.06.2025 № 515/А-2025 (лист Одеської обласної державної адміністрації від 08.07.2025 № 8812/4/01-07/8981/2-25) 	
46. Забезпечення розроблення типової загальної програми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань управління публічними інвестиціями	НАДС
Мінекономіки
Мінфін
Мінінфраструктури	липень
2025 р.	затверджено та
оприлюднено типову
загальну програму
підвищення кваліфікації	не потребує додаткового фінансування
	Виконується.
Розроблено та затверджено 2 загальні короткострокові програми підвищення кваліфікації, що охоплюють питання управління публічними інвестиціями
(лист НАДС від 07.04.2025 № 3166/50-25)

Наказом НАДС від 01 липня 2025 р.       № 85-25 утворено робочу групу щодо розроблення проєкту типової загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань управління публічними інвестиціями.(лист НАДС від 09.07.2025 № 618/50-25).	
47. Забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань управління публічними
інвестиціями	НАДС
Мінекономіки
Мінфін
Мінінфраструктури	постійно
починаючи
з вересня
2025 р.	проведені відповідні
навчання державних
службовців та посадових осіб
місцевого
самоврядування	можливе залучення міжнародних грантів, коштів міжнародної технічної допомоги	Виконується.
І квартал 2025 року у Вищій школі публічного управління та регіональних центрах підвищення кваліфікації пройшли навчання з питань управління публічними інвестиціями 731 особа, з них: 336 державних службовців, 395 посадових осіб місцевого самоврядування.
(лист НАДС від 07.04.2025 № 3166/50-25)
ІІ квартал 2025 року у Вищій школі публічного управління та регіональних
центрах підвищення кваліфікації пройшли навчання з питань управління публічними інвестиціями 745 осіб, з них: 220 державних службовців, 525 посадових осіб місцевого самоврядування (лист НАДС від 09.07.2025 № 618/50-25).	
50. Забезпечення проведення навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів, що безпосередньо взаємодіють з Єдиною цифровою інтегрованою інформаційно-аналітичною  системою управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (екосистема DREAM)     	Мінінфраструктури	постійно
	проведено навчання з метою підвищення кваліфікації для працівників, що безпосередньо взаємодіють з Єдиною цифровою інтегрованою інформаційно-аналітичною системою управління процесом відбудови обєктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (екосистема DREAM)     	можливе залучення міжнародних грантів, коштів міжнародної технічної допомоги	Виконується
За підтримки Мінфіну та Мінінфраструктури, Open Contracting Partnership у серпні 2024 року провело навчання працівників головних розпорядників бюджетних коштів (центральних та місцевих органів виконавчої влади) з метою подання та оцінки публічних інвестиційних проєктів із застосуванням Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (екосистема DREAM) відповідно до постанови Уряду від 09.08.2024 № 903.
	
51. Забезпечення проведення конференцій, семінарів, тренінгів для працівників у сфері управління публічними інвестиціями	Мінекономіки
Мінфін
Мінінфраструктури	постійно
	конференції, семінари, тренінги проведено	можливе залучення міжнародних грантів, коштів міжнародної технічної допомоги	Виконується
За підтримки Мінрозвитку та залученого фінансування Уряду Великої Британії було проведено тренінги з розробки проектів із використанням методології «5 кейс-моделей»
(лист Мінрозвитку
від 14.01.2025 № 941/24/10-25)	
55. Оновлення єдиного портфеля публічних інвестиційних проектів	Мінекономіки
Мінфін
Мінінфраструктури	щороку у травні	портфель схвалено Стратегічною інвестиційною радою	не потребує додаткового фінансування	Виконується
Мінекономіки здійснює формування Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій держави на 2026 рік, який включає проєкти та програми з галузевих (секторальних) проєктних портфелів держави, що відповідають пріоритетним напрямам публічного інвестування та подані відповідальними за галузі міністерствами 
(лист Мінекономіки від 22.07.2025 №3502-05/49810-03)	
56. Забезпечення розроблення, скринінгу та пріоритезації публічних інвестиційних проектів відповідно до уніфікованих вимог, установлених законодавством	Мінекономіки
Мінфін
Мінінфраструктури
обласні державні (військові) адміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)	постійно	80 відсотків поданих концепцій та проектних пропозицій містять вичерпний перелік інформації та документів відповідно до встановлених вимог та повністю або частково відповідають основним критеріям	не потребує додаткового фінансування	Виконується
Мінекономіки забезпечується проведення скринінгу та пріоритезації публічних інвестиційних проєктів відповідно до уніфікованих вимог, установлених законодавство  
(лист Мінекономіки від 22.07.2025 №3502-05/49810-03)	
66. Створення допоміжних технічних інструментів для підготовки, оцінки та аналізу реалізації інвестиційних проектів у рамках функціонування Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (екосистема DREAM)	Мінінфраструктури
Мінекономіки
Мінфін	червень 2026 р.	допоміжні технічні інструменти для підготовки, оцінки та аналізу реалізації інвестиційних проектів у рамках функціонування Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (екосистема DREAM) створено	можливе залучення грантових коштів,
коштів міжнародної технічної допомоги
	Виконується
Мінрозвитку здійснюється аналіз існуючих процесів, визначення показників, які потребують вимірювання в рамках реалізації інвестиційних проєктів, вимог до публічних інвестиційних проєктів, що ляжуть в основу розробки відповідних технічних інструментів. (лист Мінрозвитку від 21.07.2025 № 17978/24/10-25)	
67. Створення допоміжних технічних інструментів для проведення оцінки ризиків, пов’язаних із зміною клімату, для підготовки, оцінки та аналізу реалізації інвестиційних проектів у рамках функціонування Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (екосистема DREAM)	Мінінфраструктури
Мінекономіки
Мінфін	червень 2026 р.	технічні інструменти створено	можливе залучення грантових коштів, коштів міжнародної технічної допомоги	Виконується
Мінрозвитку заплановано проведення обговорень з центральними органами виконавчої влади для напрацювання критеріїв оцінки ризиків, пов’язаних із зміною клімату, для підготовки, оцінки та аналізу реалізації інвестиційних проєктів. (лист Мінрозвитку від 21.07.2025 № 17978/24/10-25)	
71. Забезпечення проведення навчання та підвищення кваліфікації для працівників у сфері управління публічними інвестиціями 	Мінекономіки
Обласні державні (військові) адміністрації 
Органи місцевого самоврядування (за згодою) 	постійно	проведення навчання з метою підвищення кваліфікації працівників у сфері управління публічними інвестиціями 	не потребує додаткового фінансування
	Виконується
За підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Зміцнення громадської довіри в Україні» (UCBI), у рамках програми «Академія проєктного менеджмента та міжнародної співпраці» було проведено онлайн-курс «Проєктний менеджмент у громаді»
(лист Херсонської обласної військової адміністрації від 07.10.2024 № 01-01-06-10580/0/24/16)
У рамках програми «Відновлення і стійкість», реалізованої Фондом «Східна Європа» за кошти Федерального уряду Німеччини за підтримки Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, проведено навчання за напрямами: управління проєктами,  проєктний  менеджмент, фандрейзингові можливості, доступні до залучення в Україну, підготовка проєктних заявок
(лист Херсонської обласної військової адміністрації від 09.01.2025 № 01-01-06-343/0/25/16).
Проведено навчання за  короткостроковими програмами у сфері управління публічними інвестиціями:  
«Становлення та розвиток міжнародного партнерства територіальних громад»; 
«Міжмуніципальне співробітництво як механізм спільного вирішення питань місцевого значення»; 
«Розробка інвестиційного паспорта громади»; 
«Підготовка проєктних заявок на окремі конкурси проєктів: можливості міжрегіонального співробітництва за Програмою ЄС «Interreg Europe»;
«Як працювати з фондами, спрямованими на відновлення України та підготовку вступу країни-кандидата до ЄС»; 
«Управління проєктним циклом: від ідеї до звітності (як написати хороший проєкт)»; 
«Розробка інвестиційного паспорта громади»; 
«Регіональна політика як складова економічного розвитку області»; 
«Брендинг як складова маркетингу територій, формування локальної ідентичності»
(лист Чернігівської  обласної державної адміністрації від 09.01.2025 
№ 01-01-18/301- вих)
Проведено семінар з питань залучення грантових коштів, коштів міжнародної технічної допомоги (лист Івано-Франківської обласної військової адміністрації від 28.03.2025 № 2140/7292/6-25/01-005)
Проведено навчання з теми: 
 «Розробка інвестиційного паспорту громади» для Іванівської сільської ради;
«Управління проєктним циклом: від ідеї до звітності» для Бахмацької міської, Добрянської, Новобасанської та Ріпкиської селищних рад;
«Підготовка проєктних заявок на окремі конкурси проєктів»;
«Підготовка проєктних заявок на окремі конкурси проєктів» для Бахмацької міської ради; 
«Основи парсипативного стратегічного планування»; 
«Програми ЄС що доступні для заявників з України: особливості розробки та подачі проєктів на програму «LIFE» (за підтримки фонду Ганнса Зайделя, Баварія, Німеччина)  (лист Чернігівської обласної державної адміністрації від 09.04.2025 № 01-01-18/3804)
Участь у навчальних курсах та семінарах:
 «Розробка бізнес-кейсів для інфраструктурних проєктів (за Моделлю п'яти кейсів)»,
«Фінансова діяльність територіальних громад як складова управління їх
 розвитком та європейської інтеграції» 
«Партисипативне стратегічне планування: з чого почати»; 
«Управління проєктним циклом: від ідеї до звітності (як написати хороший проєкт)»; 
«Впровадження системи «RBM - управління орієнтоване на результат» у сфері регіональної політики»; 
«Розробка інвестиційного паспорта громади» (лист Чернігівської обласної військової адміністрації від 10.07.2025 № 01-01-18/7485-вих).